제안 요청서

사 업 명	지역어 종합 정보 체계 구축
주관기관	문화체육관광부 국립국어원
담당부서	어문연구실 어문연구과

2015. 5.

사업 관리자	어문연구과장	이승재	전화: 2669-9711
사업 담당자	한시임기제 6호	박주화	전화: 2669-9716
			팩스: 2669-9737
			전자 우편: coin@korea.kr

차    례

Ⅰ. 사업 개요	1

1. 사업명	1

2. 사업 목적	1

3. 사업 기간 및 예산	1

4. 주요 내용	2

5. 추진 체계	3

6. 추진 일정	4

7. 정보시스템 현황	5

Ⅱ. 제안 요청 사항	6

1. 요구 사항 목록	6

2. 요구 사항 상세	7

3. 계약 특수 조건	15

Ⅲ. 제안 안내	19

1. 입찰 참가 자격	19

2. 입찰 및 낙찰 방식	19

3. 입찰 서류 및 제안서 제출 안내	21

4. 유의사항	22

5. 기타	23

Ⅳ. 제안서 작성 요령 및 서식	24

1. 제안서 작성 요령	24

2. 제안서 평가 기준	29

3. 입찰 및 제안서 관련 서식	30

I.		사업 개요

1. 사업명: 지역어 종합 정보 체계 구축

2. 사업 목적

ㅇ 분산되어 있는 지역어 자료를 통합 검색, 활용 시스템으로 구축하여 종합적으로 관리

ㅇ 지역어 지도 제작을 위한 기초 자료 통합 관리 시스템 개발 필요

ㅇ 지역어 자료의 정보 검증을 통한 정보의 신뢰도 제고

3. 사업 기간 및 예산

ㅇ 사업 기간: 계약 체결일∼2015. 12. 15.

※ 본 사업은 ‘정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제23조’에 의거하여 소프트웨어사업 적정 사업기간을 산정한 사업임.

항목

계산식

결과

① 소프트웨어사업 규모

소프트웨어사업 대가산정 가이드 준용

299.5 FP

② 1인 생산성

사업규모(FP)	1인 생산성(FP/MM)
1,000 이하	19

19

③ 1인 총 투입기간

1인 총 투입기간 = 사업규모 / 1인 생산성

15.7개월

④ 투입 인력 수

-

3명

⑤ 개발 기간

1인 총 투입기간 / 투입 인력 수

5.2개월

⑥ 특이사항

운영 전략 수립 컨설팅, 자료 입력 및 기타 연구 개발에 필요한 사업 기간(4MM)

2개월

⑦ 총 사업 기간

7.2개월

ㅇ 소요 예산: 150백만 원(부가세 포함)

※ 본 사업은 소프트웨어 분리 발주 대상 사업임.(하드웨어, 소프트웨어 구매는 별도 사업으로 추진)

4. 주요 내용

ㅇ 지역어 종합 정보 체계 분석, 설계

- 지역어 음성 자료 및 전국 방언 지도 관리를 위한 데이터베이스 설계, 기능 및 화면 설계

- 지리정보시스템(GIS)을 활용한 유사 정보 체계 분석

ㅇ 지역어 종합 정보 관리, 검색 시스템 기능 개발

- 음성 정보 등록, 편집, 검색 기능 개발

- 지역어 전사 및 표준어 대역 텍스트 정보 제공 기능 개발

- 구술, 어휘, 문법, 음운 등 음성 정보 제공 기능 개발

- 표준어 항목, 지역어 항목, 지역 항목 간 연계 기능 개발

- 상황에 따른 간단한 인사말(감사, 격려 등 텍스트 자료) 구축 및 제공

- 지역어 통합 자료실 자료 등록, 편집, 검색 기능 개발

- 지리정보시스템(GIS)을 활용한 전국 방언 지도 반영

ㅇ 지역어 지도 관리 및 제공 시스템 개발

- 지리정보시스템(GIS) 연계한 전국 언어 지도 구축, 검색 및 저장

ㅇ 목표 시스템 구성도

5. 추진 체계

ㅇ 추진 체계도

국립국어원

o 계획서 및 제안요청서 작성

o 자문위원회 및 실무팀 운영

o 상세 요구 사항 정비

o 시스템 운영

주관 사업자

o 시스템 개발

o 운영 교육/기술 전수

o 사업 진도 관리

조달청

o 사업자 선정 및 계약 체결

지역어 종합 정보 체계 구축

실무팀

o 요구 사항 도출/검토

o 시스템 개발 의견수렴

o 시스템 시험

자문위원회

o 기술 자문 및 평가

o 사업 추진 방향 자문

ㅇ 조직별 담당 업무

구 분	역 할
국립국어원 (어문연구과)	￮ 사업 계획(안) 수립 ￮ 사업 추진 및 수행 총괄 ￮ 정보 시스템 감리 추진 ￮ 자문 위원회 운영
조달청 (서울지방조달청)	￮ 사업 입찰 공고 ￮ 사업자 선정 및 계약 체결
자문위원회	￮ 기술 자문 및 평가 ￮ 사업 추진 방향 자문
주관 사업자 (용역 기관)	￮ 사업 수행 및 결과 보고 ￮ 시스템 운영 지원 ￮ 교육 및 기술 지원

6. 추진 일정

ㅇ 사업 계획 수립 및 확정          : 2015. 5월 중

ㅇ 조달 계약 의뢰, 공모             : 2015. 5월 중

ㅇ 용역 사업자 선정 및 계약 체결   : 2015. 6월 초

ㅇ 시스템 개발 사업 추진           : 계약일~2015. 12. 15.까지

ㅇ 설계 단계 감리                  : 2015. 8월 초

ㅇ 종료 단계 감리                  : 2015. 11월 중

단계	세부 업무	추진 일정
		M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7
분석	□요구사항 및 시스템 분석
설계	□업무 및 시스템 기능 설계
개발	□시스템 개발
자료 구축	□어문 규범 관련 자료 구축
시험 및 보완	□개발기능에 대한 시험과 보완
사업 완료	□산출물 제출, 교육 및 사업 완료

7. 정보시스템 현황

※ 상세 내역은 보안서약서 징구 후 담당자 입회하 열람 가능

◦ 위치 : 서울 강서구 금낭화로 154, 국립국어원 2층 전산실

◦ 동 사업의 성공적 추진을 위한 웹, WAS, DB 등 정보시스템 구현(구축) 방안을 제안할 것

- 제안 시스템 구현(구축)을 위한 현재 국립국어원 보유 정보시스템 활용 또는 신규 정보시스템의 별도 구매 여부는 사업 수행업체 선정(계약) 이후 상호간 협의하여 결정함.

Ⅱ.		제안 요청 사항

1. 요구사항 목록

구 분	설 명	항목 수
컨설팅 요구사항-CSR (ConSulting Requirement)	목표 시스템의 구축 및 운영을 위한 기존 시스템 및 데이터 분석을 통한 설계 요구사항 기술	1
기능 요구사항-SFR (System Function Requirement)	목표 시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 수행할 수 있어야 하는 기능에 대한 요구사항 기술	8
데이터 요구사항-DAR (Data Requirement)	데이터의 변환 및 구축에 필요한 요구사항 기술	1
제약사항-COR (Constraint Requirement)	상위 요구사항 외에 사업수행에 필요한 제약 및 요건을 기술	2
보안 요구사항-SER (SEcurity Requirement)	시스템 및 데이터의 보안 유지에 대한 요구사항 기술	1
프로젝트관리 요구사항-PMR (Project Management Requirement)	사업수행조직, 관리방법론, 일정계획, 요구사항 관리 등을 기술	2
프로젝트지원 요구사항-PSR (Project Support Requirement)	프로젝트 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 요구사항으로 사업관리, 하자보수, 교육지원 요구사항 등을 기술	4

2. 요구사항 상세

□ 지역어 종합 정보 체계 구축

요구사항 고유번호		CSR-001
요구사항 명칭		지역어 종합 정보 체계 분석 및 설계
요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 기존 지리정보시스템(GIS) 활용한 유사 정보 체계 분석 및 관리시스템 설계
	세부 내용	ㅇ 서울시 ‘함께 서울 지도’ 내 지도 서비스 시스템 분석 ㅇ 국립국어원 지역어 담당자, 사용자의 의 요구사항 수집 및 분석 ㅇ 지역어 음성 자료 및 전국 방언 지도 관리를 위한 데이터베이스 설계, 기능 및 화면 설계

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		지역어 종합 정보 체계 계정 관리 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 종합 정보 체계 계정 관리 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 계정 관리 기능 - 지역어 종합 정보 체계의 사용자 등급을 시스템관리자, 자료관리자로 구분하며, 시스템관리자는 자료관리자를 추가, 수정, 삭제할 수 있음. - 시스템관리자는 이름, 아이디, 전자우편주소, 지역어 자료 편집 권한을 설정하여 자료 관리자 계정을 추가하며, 시스템은 설정된 전자우편주소로 아이디와 비밀번호 등 생성된 계정 정보를 자동으로 발송할 수 있음. - 시스템관리자는 자료의 추가, 수정, 삭제, 의견 제시 등 지역어 자료 편집 권한을 자료 관리자 별로 설정할 수 있음.

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		지역어 종합 정보 체계 자료 편집 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 종합 정보 체계 지역어 관련 자료 편집 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 지역어 음성 자료 및 텍스트 자료를 항목별로 추가, 수정, 삭제할 수 있음. ㅇ 지역어 음성 자료 및 텍스트 자료를 항목별, 어휘별, 지역별로 검색할 수 있음. ㅇ 지역어 음성 자료 및 텍스트 자료를 단어 또는 상세검색 조건으로 검색할 수 있음.

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		지역어 종합 정보 체계 자료 관리 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 종합 정보 체계 자료 관리 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 지역어 음성 자료 및 텍스트 자료와 전국 방언 지도 연계 및 관리 기능 ㅇ 지역어 자료 간 연계 - 구술 전사 자료, 표준어 대역 자료, 구술(음성) 자료 연계 - 어휘 자료(지역어, 표준어), 어휘 음성 자료 연계 ㅇ 연계된 지역어 음성 자료 및 텍스트 자료 관리 - 지역어와 연결된 지역어 자료(음성 자료 포함)는 삭제할 수 없으며 연결을 제거한 후에 삭제가 가능함.

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		전국 방언 지도 관리 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 전국 방언 지도 편집 이력 관리 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 전국 방언 지도 내 지역별 자료 추가, 수정, 삭제 이력을 조회할 수 있음. ㅇ 전국 방언 지도 편집 결과를 연도별로 비교할 수 있음.

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		지역어 관련 검색 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 옵션 선택 및 상세 검색 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 지역어 검색 기능 - 검색 옵션 항목 설정(완전일치, 부분일치) - 지역어 상세 검색 기능 설정 · 지역별: 강원, 경기, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 · 주제별: 농경, 음식, 가옥, 의복, 민속, 인체, 육아, 친족, 동물, 식물, 자연 · 자료 유형별: 음성 자료, 텍스트 자료

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		지역별 인사 표현 출력 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 상황에 따른 지역별 인사 표현 출력 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 상황에 따른 인사 표현의 지역별 출력 기능 - 표준어 인사 표현 항목 설정 - 표준어 인사 표현과 연계된 지역별 인사 표현 출력 기능 · 인사 분류: 일상적인 인사, 감사, 축하, 격려, 겸양 등 · 방식: 표준어 인사 표현(예문) 선택 → 지역 선택 → 지역 인사 표현 출력 · 자료 유형별: 텍스트 자료

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		지역어 통합 자료실 검색 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 통합 자료실 내 자료 검색 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 지역어 통합 자료실 내 지역어 음성 자료 검색 기능 - 검색 옵션 항목 설정(완전일치, 부분일치) - 지역어 상세 검색 기능 설정 · 자료 유형: 구술 자료, 어휘 자료, 음운 자료, 문법 자료 · 연도별: ’04년~’11년 · 지역별: 강원, 경기, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 · 주제별: 농경, 음식, 가옥, 의복, 민속, 인체, 육아, 친족, 동물, 식물, 자연 ㅇ 지역어 통합 자료실 내 지역어 텍스트 자료 검색 기능 - 검색 옵션 항목 설정(완전일치, 부분일치) - 지역어 상세 검색 기능 설정 · 자료 유형: 구술 전사 자료, 표준어 대역 자료 · 연도별: ’04년~’13년 · 지역별: 강원, 경기, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 · 주제별: 농경, 음식, 가옥, 의복, 민속, 인체, 육아, 친족, 동물, 식물, 자연

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		전국 방언 지도 이용 기능 개발
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 전국 방언 지도 내 자료 검색 및 지도 저장 기능 개발
	세부 내용	ㅇ 전국 방언 지도 내 지역어 검색 기능 - 지역어 검색 기능 설정 · 검색어 입력: 표준어, 지역어(완전일치, 부분일치) · 지도 보기 옵션 항목 설정(어형, 방언 면색, 상징 부호, 지도 경계선, 지역 경계선, 음성 파일 듣기, 제목 입력 등) ㅇ 전국 방언 지도 내려 받기 기능 - 방언 지도 이미지 파일 저장(JPEG, GIF, PDF 등)

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		지역어 종합 정보 체계 DB 등록
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 지역어 자료(음성, 지도 등) DB 구축
	세부 내용	ㅇ 지역어 자료 등록 - 지역어를 주제별, 지역별, 어휘별, 연도별로 세분하여 입력 ㅇ 지역어 텍스트 파일, 음성 자료 등록 및 연계 - 주제별, 지역별, 어휘별로 검색하여 지역어 음성자료, 지역어 텍스트 파일 및 전국 방언 지도 출력

□ 제약 사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		표준 지침 준수 및 기술 적용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 시스템 개발 시 준수해야 할 표준과 기술 적용
	세부 내용	ㅇ ‘정보시스템 구축․운영 지침’ 준수 ㅇ ‘전자정부 웹 호환성 준수 지침’ 준수 ㅇ ‘행정기관 등의 웹사이트 운영 가이드라인’ 준수 ㅇ ‘전자정부 웹표준 준수 지침’을 준수하여야 하며, IE(9, 10, 11), Firefox, Safari, Opera, Chrome 브라우저에서 웹사이트 정상 동작하도록 범용성 및 호환성이 확보되어야 함. ㅇ 국제 웹 표준 기술규격 및 KADO 웹 접근성 일반 권고안 준수 ㅇ 정보시스템 감리 기준 준수

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		설계 및 개발 제약사항
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 시스템 설계 및 개발 시 준수해야 할 제약사항
	세부 내용	ㅇ 국립국어원 홈페이지, 개방형 사전 시스템 등과 충돌되지 않음으로써 시스템의 연속성과 확장성이 확보될 수 있도록 설계 ㅇ 유니코드와 이를 위한 인터넷 표준 부호화 방식(utf-8 등)을 사용한 시스템 구축 ㅇ 웹페이지 상에서 다국어 문자 입출력이 용이하도록 설계

□ 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 지침 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 보안 지침 준수
	세부 내용	ㅇ 국가정보보안기본지침, 국가사이버안전매뉴얼(국가정보원), 국가사이버안전센터의 「홈페이지 보안 관리 매뉴얼」을 참고하여 8대 취약점 제거 ㅇ 주요 서버는 필요 시 ‘보안 서버(S/W)’(SSL)를 설치하여 전산 보안에 대비(예: https//:~) ㅇ 게시판 관련 보안취약점(XSS 파일 등 업로드) 반드시 제거 ㅇ 웹 서버 및 웹 애플리케이션 환경 설정 시 보안취약점 사전 제거, 관리자 기능은 내부망의 지정된 시스템에서만 접근할 수 있도록 통제 ㅇ 개인정보 및 인증 정보를 소통⋅저장할 경우 암호화 ㅇ 홈페이지 회원(개인)정보 등 중요자료 저장 DB 서버는 내부망에서 운영, 외부망과의 연결은 침입차단시스템 및 접근 제어 보안 기능이 있는 미들웨어시스템을 이용하여 제공 (미들웨어→웹 서버로 접속방향을 단일화하고 침입차단시스템 정책에 적용)

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업 관리 방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 사업 관리 및 품질 보증 계획 수립
	세부 내용	ㅇ 사업을 추진하기 위한 기본 방침, 구축 체계, 보고 체계와 품질 보증을 위한 위험요소, 변경, 지원, 협조 등의 사업 관리 방안 및 절차에 관한 계획을 수립하여 제시 ㅇ 단계별 일정, 우선순위, 소요자원 분배 계획 제시

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		수행 조직 및 투입 인력
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 수행 조직 및 투입 인력 계획
	세부 내용	ㅇ 사업을 수행할 조직 및 업무분장 사항을 상세하게 제시 ㅇ 컨소시엄의 경우, 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여 비율 명시 ㅇ 분야별 전담 인력은 본 사업 수행기간 동안 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없으며, 착수 이후 투입 인력 변경은 사전에 발주처의 승인을 얻어야 함. ㅇ 본 사업은 하도급을 허용하지 않는 것을 원칙으로 하되, 하도급이 불가피한 경우 사업의 내용 및 범위, 하도급 업체에 대한 명세, 등 관련 자료를 첨부한 소프트웨어 사업 표준 하도급계약서에 대한 사전 승인을 받아야 함.

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시스템 운영 지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 시스템 운영 지원
	세부 내용	ㅇ 하드웨어의 도입 및 이관, 시스템 장애 처리, 정기 점검 및 개선 등 시스템 운영을 위해 필요한 경우 지원 ㅇ 사업 수행 기간 동안 시스템 개발 및 시험에 필요한 장비 및 소프트웨어는 용역 수행 업체가 확보하여 지원

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		평가회 등 자문회의 지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 평가회, 협의 등 자문회의 지원
	세부 내용	ㅇ 착수 보고회 및 완료 보고회 등 사업과 관련된 보고회, 평가회를 위한 자문회의를 진행하는 경우 발주기관과 협의하여 지정된 일정 및 장소에서 보고회 또는 평가회 기획, 운영 및 결과 정리 지원 ㅇ 데이터 구축 분과와의 협의, 외부 기관과의 연계 협의가 필요한 경우 회의 운영 및 결과 정리 지원

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		교육 지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 교육 지원 요구사항
	세부 내용	ㅇ 교육에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소 등에 대한 상세사항이 포함된 교육계획서를 제출해야 하며 세부 일정 및 내용은 발주 기관과 협의 ㅇ 본 과업에 도입되는 신기술에 대하여 개발 작업 투입 인력을 대상으로 적절한 교육을 하여 시스템 성능 향상에 전력을 기울여야 함. ㅇ 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주 기관에서 교육을 요구할 때에는 이에 응해야 함.

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	ㅇ 하자보수 요구사항
	세부 내용	ㅇ 무상 하자보수 기간은 최종 검수일로부터 12개월로 하며, 동 기간 중 개발 업체가 개발 구축한 영역에 대하여 하자 발생 시 책임을 지고 개선해야 함. ㅇ 하자보수 기간 동안 장애가 발생하여 지원 요청 시 신속하고 원활하게 지원할 수 있는 세부 하자보수 계획을 제시 ㅇ 시스템별, 업무별 장애를 단계로 분류하여 체계적 복구 방안을 마련하고 전체 자원에 대한 보안 및 원격 관리 방안 등 제시 ㅇ 세부 하자 보수 계획에는 하자 보수의 처리 절차, 지원 범위, 지원 기간, 지원 방법 및 소요 비용 등 시스템 구축 시 적용된 모든 대상에 대해 세분화하여 제시 ㅇ 개발 후 시스템 및 자료 등의 변경, 확장, 기능 향상 등에 대한 계획 및 문제 발생 시의 대책을 수립하여 제시

3. 계약 특수 조건

1) 계약

ㅇ 본 계약은 총 금액을 기준으로 용역 계약을 체결한다.

2) 용역 범위

ㅇ 용역 수행 업체가 수행하여야 할 범위는 발주기관이 제시한 제안요청서에 의한다.

ㅇ 제안서의 내용을 충실하게 보완하기 위하여 변경이 필요한 사항은 상호 협의하여 변경 또는 추가할 수 있다.

ㅇ 이 사업의 주사업자는 본 사업에서 개발된 소프트웨어를 기 구축되었거나 앞으로 구축될 하드웨어 시스템에 책임지고 무상 구축을 완수해야 한다.

ㅇ 제안요청서의 용역 범위에 포함되지 않았더라도 제안사가 제안서에 명시한 사항은 본 용역 범위에 해당한다.

3) 계약 업체 근무 조건

ㅇ 용역 수행 장소는 발주기관 내 상주를 원칙으로 하되 협의에 의해 조정할 수 있다.

ㅇ 용역 업체의 근무 시간은 발주기관 근무 시간과 동일하게 한다.

ㅇ 용역 수행과 관련한 용역 업체 측 사용 집기 비품 및 기계 장비는 용역 업체가 준비하여 용역을 수행하는 것을 원칙으로 한다.

ㅇ 제안 업체 및 선정된 업체는 발주 기관의 일반적인 업무수행 규칙을 준수하여야 한다.

4) 보안 및 자료 관리

ㅇ 제안사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에라도 보안을 준수하여야 함.

<기타 준수해야 할 관련 규정>

- 국가정보보안 기본지침, 국가사이버안전관리규정, 국가사이버안전매뉴얼(국가정보원), 문화체육관광부 개인정보보호 지침

- 문화체육관광부 보안업무규정시행세칙

- 문화체육관광부 정보화업무 규정

- 국립국어원 정보 보완 업무 처리 규정

(상기 규정집 자료 제공은 발주처가 사업자에게 제공한다.)

ㅇ 본 사업에 종사하는 모든 인원은 별도 양식에 의한 보안 각서를 반드시 제출하여야 함.

ㅇ 사업 수행으로 발생한 보고서, 조사 자료, 원시 프로그램 등 일체의 산출물 및 결과물은 발주기관(국립국어원)의 소유로 한다. 다만, 용역 수행 업체는 원시 프로그램에 대해 개작권을 가지며, 이 2차 저작물은 공동소유로 한다.

ㅇ 발주기관에서 제공한 원시 자료를 이용하여 사업을 수행하고자 할 때에는 지적소유권(저작권)여부를 확인하고 사용하여야 한다.

ㅇ 제안사가 용역 수행 업체로 선정되어 발주기관으로부터 제공된 제반 자료는 본 계약의 목적 외에는 사용하지 못하며 사업 종료 시 전부 반납한다.

<용역 계약 및 자료 제공 시 보안 대책>

- 입찰공고서 및 계약서상에 용역과정 중 알게 된 기밀 누설 및 자료 유출 금지 등 준수사항과 위반 시 손해배상 책임을 진다.

(계약 위반 시 본 기관에서 발주하는 사업에 3년간 입찰을 제한한다.)

- 개발사는 참여 인원 신원 조사, 서약서 징구/제출 및 보안 교육 등 보안 조치를 취한다.

- 정보 통신망도ㆍIP 현황 등 자료 제공 시 자료 인계 인수 대장에 기록 유지, 민감 자료는 적정 등급의 비밀로 분류ㆍ제공하여 보안 유지

※ 개발 기간 동안 웹 하드, 공유 폴더 등 사용을 금하고 전산망 전송 시 암호화 및 보안 대책을 제시하고 운용한다.

ㅇ 제안사가 용역 수행 업체로 선정되어 용역 수행 중 취득한 자료는 국립국어원의 허락 없이 누설할 수 없다.

※ 용역 종료 시 보안조치 시행 등 사후관리 철저(사업 수행사 의무)

- 용역 종료 시 성과물, 각종 제공자료 및 저장매체를 전량 납품하고 컴퓨터 내 관련 자료 삭제

- 보안이 요구되는 성과물은 대외비 이상으로 분류․보관하고 대외 발표 시 사전에 발주처 정보통신보안담당관의 승인 후 시행

ㅇ 본 사업은 20억 미만의 사업으로서 “소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영 규정”에 따라 제안서 작성비를 보상할 수 있는 대상 사업에 포함되지 않는다.

5) 추진 상황 보고 및 보고서 제출

ㅇ 용역 수행 업체는 용역 수행의 효율적인 진도 관리를 위하여 용역 추진 상황을 다음과 같이 발주 기관에 보고하여야 한다.

- 착수보고: 계약일로부터 10일 이내에 사업수행계획서, 사업 책임자 이력서, 서약서 등이 포함된 착수계 제출

- 주간보고: 매주 중 용역 구성원의 업무수행 상황 보고

- 월간보고: 당월의 업무 추진상황 및 이후 추진 일정 등을 보고

- 완료보고: 용역 사업 종료 시 전체 추진 단계의 수행 결과 보고

- 수시보고: 긴급 변경 사항 및 서면 요구에 의해 지정된 내용 보고

ㅇ 용역 수행 업체는 다음과 같이 산출물을 제출한다.

산출물		포함 내용	부수	제출
착수보고서			3부	계약일로부터 10일 이내
결과 보고서		별도의 CD(3부) 포함	20부	사업 종료 10일 전
기타 산출물	사용자 설명서	사전 시스템 사용자, 운영자 교육자료 등 * 별도의 CD(3부) 포함	10부
	관리자 설명서	․ 환경 설정 명세, 프로그램 기동/종료방법, 장애 시 응급 대처 방법 ․ 디렉토리 생성 명세 및 용도, 보안 설정 정보 등 * 별도의 CD(3부) 포함	2부
	업무 기능 분해도	* 별도의 CD(3부) 포함	1부
	개발 표준 정의서	* 별도의 CD(3부) 포함	1부
	상세 일정표(WBS)	* 별도의 CD(3부) 포함	1부
	데이터베이스 테이블 명세	테이블 간 관계도(ERD), 실체(Entity) 정의서, 테이블 정의서, 인덱스 정의서 등 * 별도의 CD(3부) 포함	1부
	프로그램(source) 명세	요구사항 명세서, UI 정의서, 프로세스 명세서, 프로그램 명세서, 프로그램 소스 등 * 별도의 CD(3부) 포함	1부

ㅇ 제출하는 각종 산출물 및 보고서 등은 A4 규격으로 한글로 작성하고 별도의 CD와 함께 제출(단 결과보고서의 경우 국립국어원 연구 용역 사업 보고서 양식에 맞춤.)

ㅇ 비정규 산출물

- 과제 진행 현황 보고서(주간, 월간)

- 기타 과제 수행에 필요한 수시 보고 사항

6) 손해 배상 책임

ㅇ 이 용역 수행 중 용역업체의 귀책 사유로 발생한 모든 손해에 대하여 국립국어원에게 배상한다.

7) 기타

ㅇ 이 용역 수행 중 투입 인력에 대해 교체를 요구할 수 있으며, 허가 없이 교체할 수 없는 것을 원칙으로 하되, 퇴직 또는 질병 등 부득이한 사정으로 변동사항 발생 시에는 발주기관과 사전에 협의하여 승인을 얻고, 동급 이상의 인력으로 교체하여야 한다.

Ⅲ.		제안 안내

1. 입찰 참가 자격  [※ 입찰공고서 참조]

- 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스 사업)로 등록한 업체

- 직접생산증명서(정보시스템 개발 서비스) 소지한 자

※ 본 사업은 40억 원 미만인 사업으로서 대기업(소프트웨어사업자)은 사업 금액의 하한 규정(미래창조과학부 고시 제2014-25호)에 따라 참여할 수 없음.

2. 입찰 및 낙찰 방식

1) 입찰 방식: 제한경쟁입찰

2) 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약 체결

< 근 거 규 정 >

▪ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조2항(지식기반사업의 계약방법)에 따른 협상에 의한 계약체결

▪ 협상에 의한 계약체결 기준(계약예규(기획재정부)

3) 세부 평가 방법

ㅇ 기술평가

- 기술평가는 소프트웨어 기술성  평가기준(미래창조과학부 고시 제2014-29호, 2014. 4. 10.)에 근거함.

< 기술평가점수 산출방법 >

▷ 기술평가 점수는 평가위원이 평가한 점수 중 최고 점수 1개와 최저 점수 1개를 제외하고, 나머지 점수를 산술평균하여 획득 점수를 산출

▷ 주관기관이 평가위원회를 구성하여 제안서의 기술 평가 수행

- 평가위원회 위원은 위원장을 포함한 7인 이상(외부 전문가 과반수 이상 포함, 위원장은 위원 중 호선)으로 구성

ㅇ 가격평가

- 주관기관은 사업의 예산 규모 내에서 관련 법 및 관계규정에 따라 예정 가격을 결정 (전자정부 지원사업 관리요령 제18조)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 따라 평가점수 산출

ㅇ 종합평가 점수 산출

- 평가비율: 기술평가(90%), 가격평가(10%)

- 종합평가 점수 산출

․ 종합평가 점수(100) = 기술평가 점수(90) + 입찰가격 평가점수(10)

- 동점 시 처리 방침

․ 종합평가 점수가 동점인 경우 기술평가 점수가 높은 업체를 선정

․ 기술평가 점수도 동일한 경우 배점이 높은 평가항목에서 점수가 높은 업체를 선정

․ 기술평가 항목별 점수도 동일한 경우는 추첨에 의해 결정함

․ 평가 점수에서 소수점 이하가 있는 경우 소수점 3자리에서 반올림

ㅇ 우선 협상 적격 대상자 선정

- 제안서 평가 결과 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.(제안서평가 점수(90점)만을 기준으로 동 점수의 일정비율(85%) 이상인 자를 협상적격자로 선정)

- 협상순서는 상기 항에 따른 협상적격자의 기술평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정한다. 다만, 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 한다.

ㅇ 협상 방법 및 기준

- 협상 대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시

․ 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 가능

- 용역 발주기관의 협상 금액은 협상 대상자가 제안한 가격으로 함

․ 단, 협상 대상자가 제안한 가격이 예정가격 이상인 경우에는 예정가격 이하로 가격을 조정할 수 있음.

․ 제안요청 시 포함되지 않았으나 주관기관의 협상 요구에 의하여 사업 범위가 증가될 수 있음.

3. 입찰서류 및 제안서 제출 안내

1) 제출 안내

ㅇ 제안서 제출 마감

- 일시 및 장소: <입찰 공고> 참조

- 유의사항: 제안서는 입찰 기한 내에 제안사가 직접 제출하여야 하며, 우편 접수는 불가함.

ㅇ 제안 평가회

- 평가회 일시 및 장소: (별도 통보)

- 유의사항

․ 제안 설명은 제안사(주사업자)의 용역관리자(PM) 등이 직접 발표해야 하며, 제안 설명회 참석자 수는 5인 이내로 함.

․ 제안 설명회 시간은 발표 20분, 질의응답 10분 이내로 함.

2) 제출 서류

ㅇ 제안서 10부(원본 1부 포함), 제안 설명회 설명 자료 10부와 동 내용이 모두 수록된 CD 3매

ㅇ 소프트웨어사업자신고확인서 사본(제안서 첨부)

ㅇ 조달청입찰참가자격등록증 사본(제안서 첨부)

ㅇ 기타 입찰공고에서 정한 서류

4. 유의사항

ㅇ 제안사는 본 용역사업이 성공적인 수행을 위한 효율적인 용역 관리 방안을 제시하고 우리 원과 협의하여 사업을 수행하여야 함.

ㅇ 제출된 제안서는 일절 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 입찰 참가자의 부담임.

ㅇ 제안 내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 입찰 참가자는 이에 응하여야 함.

ㅇ 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄 구성원을 변경할 수 없음.

ㅇ 제안서 작성 시 참여 인력은 컨소시엄 구성원의 자사 인력으로 구성할 것

- 참여 인력을 구성함에 있어 파견근로자를 활용한 경우에는 “파견근로자보호등에관한법률” 등 관계법령을 준수하여야 하며, 제안서 작성 시 파견근로자의 원소속사를 반드시 명기하여야 함.

- 컨소시엄 및 협력업체의 참여 시 범위, 비용과 역할 등을 구체적으로 명확하게 제시하여야 함.

ㅇ 투입 인력 중 우리 부의 필요에 의해 특정 분야 인력의 교체를 요구할 경우, 동급 이상의 인력으로 교체하여야 함.

ㅇ 사업 수행에 필요한 시스템 진단 및 평가 도구, 소프트웨어 테스트에 필요한 장비 및 소프트웨어는 사업 수행 업체에서 준비하여야 함.

ㅇ 제안서의 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계 서류를 첨부하여 사실을 기재하여야 하며 허위 작성한 사실이 판명되면 평가 대상에서 제외함.

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 우리 원이 요청하지 않는 한 수정, 삭제 또는 대체할 수 없음.

ㅇ 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함.

5. 기타

ㅇ 제안 안내서, 제안 요청서 및 입찰 공고 등에 포함되지 않은 사항은 “국가를당사자로하는계약에관한법률”, “협상에의한계약체결기준”, “용역적격심사및협상에의한낙찰자결정기준” 등 국가계약 관련 법령을 따름.

Ⅳ.		제안서 작성 요령 및 서식

1. 제안서 작성 요령

1) 작성 지침(권고 사항)

ㅇ 제안서 작성은 제시된 목차 및 작성 지침을 준용하여 작성하여야 함.

ㅇ 제안 가격 작성 시 기능점수(FP) 방식을 우선하여 개발비를 작성하여야 함.

ㅇ 제안서는 100쪽 이내로 작성하여야 함.

ㅇ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함.

ㅇ 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어표를 제공해야 함.

ㅇ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어, 사용 가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함.

ㅇ 주관기관이 필요 시 입찰 참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약 조건의 일부로 간주함.

2) 제안서 목차

Ⅰ . 제안개요

Ⅱ. 제안업체 일반

1. 일반현황

2. 조직 및 인원

3. 주요 사업 내용

4. 주요 사업 실적

Ⅲ. 기술 부문

1. 시스템 구성도

2. 사업 추진 방안

가. 방법론 활용 방안

나. 업무별 추진 방안

다. 데이터 이관 및 통합 방안

라. 시스템 통합 방안

마. 산출물 내역

3. 표준화 방안

4. 시스템 시험 방안

5. 시스템 운영 방안

6. 향후 시스템 발전 방향

Ⅳ. 사업관리부문

1. 품질 보증 계획

2. 위험 관리 계획

3. 추진 일정 계획

4. 업무 보고 및 검토 계획

5. 수행 조직 및 업무 분장

6. 투입 인력 및 이력 사항

Ⅴ. 지원부문

1. 교육 훈련 계획

2. 유지 보수 계획

3. 기술 이전 계획

4. 기타 지원 사항

Ⅵ. 기타

3) 세부 작성 지침

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안 개요	제안사는 해당 사업의 제안 요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.
Ⅱ. 제안 업체 일반
1. 일반 현황	제안사의 일반 현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다.
2. 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원 현황을 제시하여야 한다.
3. 주요 사업 내용	제안사의 주요 사업 내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다.
4. 주요 사업 실적	해당 사업과 관련이 있는 주요 사업 실적을 제시하여야 한다.(입찰일 현재 수행 중인 사업도 기재 가능)
Ⅲ. 기술부문
1. 시스템 구성도	주관 기관의 요구 사항을 만족하는 목표 시스템의 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.
2. 사업 추진 방안
가. 방법론 활용 방안	개발 등에 적용할 방법론 및 기법의 활용 방안을 제시하여야 한다.
나. 업무별 개발 방안	대상 업무별 개발 방안, 운영 전략 수립 및 지원 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.
다. 데이터 이관 및 통합 방안	시스템 개발 후 기 구축 데이터의 이관 및 기존 DB 통합에 관한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.
라. 시스템 통합 방안	시스템 통합 구축 시의 각 구성 요소별로 차질 없는 업무 수행을 위해 시스템 통합 절차 및 방안을 제시하여야 한다.
마. 산출물 내역	제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출 시기를 기술한다.
3. 표준화 방안	제안요청서에 명시된 업무 표준과 기반 표준에 대한 표준화 방안을 기술한다.
4. 시스템 시험 방안	대상 시스템의 단위 시험, 통합 시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.
5. 시스템 운영 방안	개발 완료 후의 시스템의 이용 및 관리 운용에 관한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
6. 향후 시스템 발전 방향	본 시스템과 관련 향후 발전 방향에 대한 방안을 기술한다.
Ⅳ. 사업 관리 부문
1. 품질 보증 계획	품질 보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시하여야 한다.(성능 테스트 방법 등 기술)
2. 위험 관리 계획	위험 관리를 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시하여야 한다.
3. 추진 일정 계획	사업 추진 예정 일정을 참조하여 추진 일정을 상세히 제시하여야 한다.
4. 보고 및 검토 계획	사업 기간 동안 이루어질 보고 및 검토 계획을 상세하게 제시하여야 한다. - 월간, 주간, 일일, 수시보고 - 단계별 검토회의 등
5. 수행 조직 및 업무 분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무 분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 투입되는 인력은 주사업자의 개발인력 위주로 편성 - 컨소시엄으로 구성한 경우에는 공동수급표준협정서 제8조에 명시한 공동수급업체별 참여비율을 명시하여야 함.
6. 투입 인력 및 이력 사항	본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입 인력에 대한 이력 사항을 붙임 양식을 이용하여 작성하여야 한다. ※ 유의사항 - 투입 인력은 컨소시엄 구성원의 자사 인력으로 구성하여야 함 ․ 다만, 파견 근로자는 자사 인력으로 간주함. (원소속사를 반드시 명기하여야 하며, “파견근로자보호등에관한법률” 등 관계 법령을 준수하여야 함) ․ 컨소시엄 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 주관 기관의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사 인력으로 대체하여야 함. (단, 상용 S/W, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 도급으로 간주하지 않음) - 사업자 선정 이후 주관 기관의 요구 등 특별한 사유가 없는 한 투입 인력을 교체 변경할 수 없음.

구 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅴ. 지원 부문
1. 교육 훈련 계획	사용자, 관리자 등 시스템의 이용 대상자별로 구분하여 교육 내용, 교육 기간, 인원 등을 상세히 제시하여야 한다.
2. 유지 보수 계획	장애 처리 절차, 유지 보수 체제 등 유지 보수를 위한 종합적인 방안이 제시되어야 한다.
3. 기술 이전 계획	원활한 시스템 운영을 위해 유지 보수 요원에 대하 기술 이전 계획을 분야별로 상세하게 제시하여야 한다. 단, 산출물로 제시할 수 없는 원천 기술 부문이 있는 경우 이를 제안서 상에 명시하여야 한다.
4. 기타 지원 사항	본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술한다.
Ⅵ. 기타	위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.

2. 제안서 평가 기준

평가부문	평가항목	평가요소	배점 기준
일반부문	이행실적	∙ 관련분야 사업실적	10
	경영상태	∙ 재무구조․대외인지도․신용도
계획부문	사업의 이해도	∙ 당해 사업의 목적․수행범위․요건의 이해도	15
	추진방법	∙ 유지보수 전략․절차․범위․방법․일정의 적정성
관리부문	관리방법론	∙ 인력관리, 보안관리, 위험관리, 형상 관리 방법의 적정성	20
	사업 수행조직	∙ 유지보수 인력 구성의 적정성 및 전문성
	전문 업체 참여 및 상호협력	∙ 전문 업체 참여도 및 기술의 부합성 ∙ 공동수급 구성의 적정성
수행부문	유지보수	∙ 유지보수 수행체계․운영절차․운영 방법의 적정성 ∙ 사용자 편의성 충족도	25
	장애복구	∙ 장애·예방대책, 대응체계, 처리 절차, 처리방법의 적정성
	네트워크	∙ 네트워크 운영방안․기능향상 방안의 적정성
	정보보안	∙ 내부정보유출방지 관리방안 적정성 ∙ 보안 점검방법·대응방안의 적정성
지원부문	기술지원	∙ 기능 및 성능 최적화, 개선 지원방안의 적정성 ∙ 기술 정보 제공 및 자문 방안의 적정성	20
	교육훈련	∙ 교육 계획 및 기술력 향상방안의 적정성
	기술이전	∙ 기술이전 계획의 적절성․내용의 충실성
합 계			90

3. 입찰 및 제안서 관련 서식

<서식 1호>

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

<제출서식 2호>

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계

※ 최근연도 결산 신고된 소프트웨어 사업자 신고 확인서를 첨부한다.(소프트웨어산업 진흥법(2008.8.7.) 24조, 소프트웨어산업 진흥법시행령(2008.8.7.) 14조, 지식경제부 고시 제2008-209호(2008.12.24.) 8조)

<제출서식 3호>

주요사업실적

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

※ 현재 수행 중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안 과제와 유관한 것만 기재한다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

※ 사업별 사용 개발방법론을 비고에 기재한다.

※ 사업 실적은 한국소프트웨어산업협회에서 발행하는 이행 실적 확인서를 첨부한다.

<제출서식 4호>

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업참여임무				기술등급			목표투입공수

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ～ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

※ “파견근로자보호등에관한법률” 등에 의한 파견근로자인 경우에는 파견업체명과 원소속사를 함께 명기하여야 함. (예시) 업체명 (원소속사명)

※ 기술등급은 "엔지니어링사업대가의기준“별표 4에 의한 기술자의 등급과 자격기준을 준용하여 기술하여야 함

※ 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술

※ 소프트웨어 기술자 경력은 한국소프트웨어산업협회에서 발행한 소프트웨어기술자 경력증명서 또는 경력을 증빙할 수 있는 서류 첨부한다.

<별표>                         제안서 심사 평가표

(사업명 : 지역어 종합 정보 체계 구축)

평가부문	평가항목	평가요소	배점 기준	00사	00사	00사	00사
일반부문	이행실적	∙ 관련분야 사업실적	10
	경영상태	∙ 재무구조․대외인지도․신용도
계획부문	사업의 이해도	∙ 당해 사업의 목적․수행범위․요건의 이해도	15
	추진방법	∙ 유지보수 전략․절차․범위․방법․일정의 적정성
관리부문	관리방법론	∙ 인력관리, 보안관리, 위험관리, 형상 관리 방법의 적정성	20
	사업 수행조직	∙ 유지보수 인력 구성의 적정성 및 전문성
	전문 업체 참여 및 상호협력	∙ 전문 업체 참여도 및 기술의 부합성 ∙ 공동수급 구성의 적정성
수행부문	유지보수	∙ 유지보수 수행체계․운영절차․운영 방법의 적정성 ∙ 사용자 편의성 충족도	25
	장애복구	∙ 장애·예방대책, 대응체계, 처리 절차, 처리방법의 적정성
	네트워크	∙ 네트워크 운영방안․기능향상 방안의 적정성
	정보보안	∙ 내부정보유출방지 관리방안 적정성 ∙ 보안 점검방법·대응방안의 적정성
지원부문	기술지원	∙ 기능 및 성능 최적화, 개선 지원방안의 적정성 ∙ 기술 정보 제공 및 자문 방안의 적정성	20
	교육훈련	∙ 교육 계획 및 기술력 향상방안의 적정성
	기술이전	∙ 기술이전 계획의 적절성․내용의 충실성
합 계			90

총   평

2015. 5.  .       평가위원 :                (인)

■ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

사업명	지역어 종합 정보 체계 구축
작성일	2015. 6. 19.(금)

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 국가정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어산업 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(미래창조과학부고시) o 전자서명인증업무지침(미래창조과학부고시) o 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(미래창조과학부고시) o 정보시스템 감리기준(행정자치부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정자치부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정자치부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정자치부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정자치부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정자치부고시) o 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(미래창조과학부고시) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정자치부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정자치부예규) o 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정자치부예규) o 표준 개인정보 보호지침(행정자치부고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준(미래창조과학부고시) o 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(미래창조과학부고시) o 분리발주 대상 소프트웨어(미래창조과학부고시) o 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(미래창조과학부고시) o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(미래창조과학부고시) o 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(미래창조과학부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(미래창조과학부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.			∨
세부 기술 지침
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		∨
	- XHTML 1.0					∨
	- XML 1.0, XSL 1.0					∨
	- ECMAScript 3rd					∨
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0					∨
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					∨
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					∨
서비스 전달 프로토콜	IPv4					∨
	IPv6					∨

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.			∨
세부 기술 지침
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					∨
	- UDDI v3					∨
	- RESTful					∨
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0					∨
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0					∨
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0		∨
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0					∨

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과					부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용		미 적용	해당없음
기본 지침
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.			∨
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			∨
세부 기술 지침
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310						∨
	o 부가통신: VoIP - H.323						∨
	- SIP						∨
	- Megaco(H.248)						∨
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0						∨
	- UNIX						∨
	- Windows Server						∨
	- Linux		∨
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android						∨
	- IOS						∨
	- Windows Phone						∨
데이터베이스	o DBMS - RDBMS						∨
	- ORDBMS		∨
	- OODBMS						∨
	- MMDBMS						∨
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000						∨
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크		∨

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용	미 적용	해당없음
기본 지침
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			∨
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			∨
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정자치부장관에게 보고하고 행정자치부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정자치부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						∨
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						∨
세부 기술 지침
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01		∨
	o 동적표현 - JSP 2.1		∨
	- ASP.net					∨
	- PHP					∨
	- 기타 ( )					∨
프로그래밍	o 프로그래밍 - C					∨
	- C++					∨
	- Java					∨
	- C#					∨
	- 기타 ( )					∨
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0					∨
	- SOAP 1.2					∨
	o 문자셋 - EUC-KR					∨
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)		∨

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과							부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분적용			미 적용		해당없음
기본 지침
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.								∨
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.								∨
세부 기술 지침
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼		∨
기술적 보안	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재ㆍ사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품							∨
	- SSO제품							∨
	- 디스크․파일 암호화 제품							∨
	- 문서 암호화 제품(DRM)등							∨
	- 메일 암호화 제품							∨
	- 구간 암호화 제품							∨
	- 키보드 암호화 제품							∨
	- 하드웨어 보안 토큰							∨
	- DB암호화 제품							∨
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품							∨
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - (네트워크)침입차단							∨
	- (네트워크)침입탐지							∨
	- (네트워크)침입방지							∨
	- 통합보안관리							∨
	- 웹 응용프로그램 침입차단							∨
	- DDos 대응							∨
	- 인터넷 전화 보안							∨
	- 무선침입방지							∨
	- 무선랜 인증							∨
	- 가상사설망							∨
	- 네트워크 접근통제							∨
	- 네트워크 자료유출방지							∨
	- 망간 자료전송							∨
	- 안티 바이러스							∨
	- 매체제어							∨
	- PC 침입차단							∨
	- PC 가상화							∨
	- 서버 가상화							∨
	- 패치관리							∨
	- 호스트 자료유출 방지							∨
	- 스팸메일 차단							∨
	- 서버 접근통제							∨
	- DB접근 통제							∨
	- 스마트카드							∨
	- 소프트웨어기반 보안USB							∨
	- 복합기 완전삭제							∨
	- 소스코드 보안약점 분석도구							∨
	- 스마트폰 보안관리							∨